현지점검 특별위원회 활동

2021. 10. 1.～10. 7.(4일간)

2021년 주요사업장 현지점검 결과

주요사업장 현지점검 특별위원회

2021년 주요사업장 현지점검 결과

(단위:천원)

연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
1	약선 소재를 이용한 쌀조청 제조 시범	매포	우덕	70,000	․우리군의 청년 창업자가 추진하는 사업임을 감안하여 사업의 성과를 달성하는 성공적 시범사업 모델이 될 수 있도록 특히, 제품생산과 판로 확대 및 홍보에도 적극적인 행정적 지원과 지속적인 관리를 주문.
2	가평지구 침수구역 개선복구 사업	매포	삼곡, 가평 등	1,790,000	․펌프장 전기실(가평길 8) 설치와 관련하여 주변 조망권 등 민원이 발생하지 않도록 적절한 위치 선정 등 설치에 만전을 기할 것을 주문.
3	매화공원 정비사업	매포	평동	3,387,760	․매포 지역주민의 정주여건 개선 및 새로운 관광자원으로 활용이 기대됨 ․진입도로 개설과 관련하여 사업 시점 부근의 사업 후 잔여 군유지에 대한 활용방안으로 작은 쉼터 조성 등 주민 편의시설 설치를 대안으로 제시하면서 진입도로 구간내 보행자 안전을 위한 보행로 확보와 차량의 양방향 통행이 어려운 구간에는 교행차로 확보를 검토하여 반영할 것을 주문. ․진입도로 개설시 상하수도 관로 계획이 포함된 만큼 휴게쉼터 조성 공간에는 이용 주민의 편의와 청결한 휴게쉼터 관리를 위해 화장실 설치를 적극 검토하여 반영할 것을 주문. ․매화공원 정비사업의 주민만족도 제고를 위해서는 주민들이 쉽게 이용할 수 있는 다양한 접근로 확보가 중요함을 지적하며 추가 예산 확보 등을 검토하여 매화공원 접근로 개설에 만전을 기할 것을 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
4	매포 공동복지 목욕탕 건립사업	매포	평동	1,532,056	․준공 이후 외벽마감 드라이비트 들뜸, 보일러실 외벽 및 건물 출입구 부근 누수 발생 등 시공상 하자로 의심되는 일부 문제점이 발생하고 있는 점을 지적하면서 전반적인 설비, 건축의 하자적인 문제점에 대해 종합적으로 검토하여 하자보수 기간 내에 시설이 보완될 수 있도록 조치 ․인도와 접하는 건물 출입구 부분은 BF(장애물 없는 생활환경) 인증으로 약간의 경사가 있어 동절기 결빙시 이용 주민의 보행 안전이 우려됨을 상기하면서 이에 대한 대책 마련에도 만전을 기할 것을 당부.
5	매포 근생형 국민체육센터 건립사업	매포	평동	4,500,000	․근생형 국민체육센터 주변의 집적화된 체육시설(매포 생활체육공원, 매포 체육관)에 비해 주차장이 협소한 문제점을 재차 지적하면서 주차장 확보 방안 마련 주문. ․국민체육센터와 인접한 매포 생활체육공원 간 이동 통로 확보 등 사용자 편의의 체육시설 이용 연계성 확보에도 만전을 기할 것을 당부. ․매포지역에 기건립 된 매포 체육관에 이어 추가로 국민체육센터까지 건립됨을 상기하면서 지역주민의 생활체육 저변 확대와 효율적인 체육시설활용 및 관리 방안 마련에 대해서도 세심한 검토와 계획을 수립할 것을 당부
6	농산물 선별집하장 리모델링 (증축) 공사	매포	평동	120,000	․금번 선별 집하장 천정고 공사로 추가 시공된 H빔 등 내부 철골 구조물에 대한 도색을 실시하여 세심한 사업 마무리 및 준공을 당부.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
7	콩 정선 선별시설 설치 지원사업	매포	평동	300,000	․특기사항 없음
8	파랑천 재해복구 사업	적성	파랑	4,216,322	․특기사항 없음.
9	상원곡 세천3․2․1 재해복구 공사	적성	상원곡	583,868	․세천변 석축 시공은 세천을 중심으로 좌우를 함께 시공했어야 함에도 한쪽 부분만 시공함으로써 석축이 시공되지 않은 쪽으로 세천이 흘러내리는 피해가 예상됨을 지적하며 추가적인 석축 시공 등 대책 마련을 주문. ․당초 석축 설계시 인접한 농로, 농경지, 임야 경사면의 예상되는 토사 슬라이딩 현상을 고려하지 않고 일률적 높이로 석축을 시공한 후 세천으로 토사 슬라이딩이 발생한다는 주민 민원이 제기되자 석축을 높이기 위하여 설계를 변경한 점을 지적하며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 현지 여건에 맞는 시설물 설계에 철저를 기할 것을 주문함. ․또한, 세천 구간내 일부 박스교량이 주변 석축의 첨단보다 다소 낮게 시공되어 박스교량의 통수단면을 최대한 확보하지 못한 점을 지적하면서 박스교량 설치시 동일한 사례가 반복되지 않도록 시설직 공무원의 현장실무 직무교육 강화를 강조. ․아울러, 세천 재해복구 공사를 마무리한 시점에서 제기되는 지역주민의 소소한 현장 민원에 관심을 가지고 검토하여 반영될 수 있도록 당부
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
10	상원곡리 맹골 세천 재해복구 공사	적성	상원곡	59,261	․특기사항 없음.
11	공공건축물 그린리모델링 사업 (대강보건지소)	대강	장림	489,669	․공공건축물 리모델링 시 건축 디자인적 요소만큼 완성도 있는 시공과 이용자의 안전 및 편리성을 최우선으로 고려되어야 할 사항임을 강조 ․일부 창호의 실리콘 마감이 고르지 못하고 전면 좌측 출입문은 벽면과 단차가 발생하게 시공하는 등 에너지 절감을 위한 주된 공사 목적은 차치하고서라도 세심한 마감 시공이 다소 미흡한 점을 지적하고, ․또한, 건물 전면의 우수관이 보건지소를 이용하는 주민의 진․출입 동선을 가로질러 배수되게 시공되어 동절기 결빙 시 어르신 등의 보행 안전이 우려됨을 지적하면서 이에 대한 보완 시공을 주문. ․거동이 불편하거나 고령의 주민 등이 보건지소 이용에 불편함이 없도록 건물 내부 통로 양쪽 벽면에는 핸드레일(안전손잡이)을 설치하고, 화장실 방향 안내 표시도 적절히 설치할 것을 주문. ․금번 리모델링 사업에 포함되지 않은 건물 우측의 기존 경계용 휀스는 오히려 미관을 저해하고 휀스로서 기능이 없음을 지적하면서 철거를 검토하고 건물 주변의 조경으로 보완할 것을 대안으로 제시. ․대강보건지소 간판은 디자인적 요소를 가미하되 ‘단양군 보건소, 대강보건지소’로 설치하여 단양군 보건소 소속의 대강보건지소임을 누구나 알 수 있도록 정비할 것을 권고.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
12	죽령천 재해예방 사업	대강	장림	250,000	․마을과 인접한 하천에는 하천의 돌을 이용하여 잔잔히 물이 고일 수 있도록 자연 친화적인 보를 만들어 달라는 것이 지역주민의 민원 사항임을 전달하며, 하천 퇴적량 및 이용 주민의 안전 사항을 충분히 검토하여 하천 정비에 반영할 것을 주문. ․본 사업장 외 하천의 본래 기능 유지와 재난 재해 사전 예방이 필요한 하천이 관내에 여러 곳이 있음을 지적하면서 시급한 사업 대상지 선정의 철저한 조사와 지역별 적절한 안배로 민원이 발생하지 않도록 당부.
13	2020 단양군공공미술프로젝트 (장림리)	대강	장림	400,000	․다자구 할머니 전설을 주제로 벽화 거리를 조성한 만큼 누구나 쉽게 벽화의 의미를 이해하면서 벽화를 감상할 수 있도록 벽면의 빈 공간을 활용하여 스토리텔링 내용을 표시할 것을 주문. ․트릭아트 포토존에는 사진 포즈 등 적절히 사진을 촬영하는 요령에 대해 설명하는 안내 문구 등 표시 검토.
14	당동 철로 통로박스 확포장 사업	대강	당동	800,000	․철로 통로박스와 인접한 접속 농로는 구배를 완화하여 정비하는 등 지역주민이 철로 통로박스 주변 농로 이용에 불편이 없도록 적절히 조치할 것을 주문.
15	낙후지역 먹는물 수질개선 사업	단양	장현	350,000	․장현리 이장님께서 마을 주민을 대표하여 금번 수질개선 사업으로 먹는 물 이용에 대한 주민 만족도가 획기적으로 개선된 점에 대해 단양군에 감사의 마음을 표시
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
16	달맞이길 안전시설 설치 사업	단양	노동	429,196	․특기사항 없음.
17	시루섬나루 조성사업	단양	상진	2,080,000	․시루섬나루 광장과 기조성된 광장 윗부분 주차장 간 보행 연결로를 확보하여 주차장도 함께 활용할 수 있도록 주문. ․단양호 수상레저 개발사업이 속속 준공 또는 시행되면서 무동력, 소형, 모터 등 테마별 수상레포츠가 점차 활성화되고 있는 실정을 상기하면서 세부적인 단양호 구역별․테마별 수상레저 운영 계획 수립은 물론 관련 부서 및 기관과 협의하여 시기적절한 수상레저 안전관리계획 수립에도 만전을 기할 것을 강조. ․아울러, 수상레저 사업이 추진되면서 직․간접적으로 영향을 받을 수밖에 없는 단양호를 터전 삼아 생계를 유지하고 있는 어업종사자와 사전에 충분한 협의를 통해 공생할 수 있는 방안 및 대책 마련에도 소홀함이 없도록 주문.
18	단양 국궁장 호우피해 복구사업	단양	상진	382,000	․특기사항 없음.
19	한강수계 단양 지오-컬쳐 조성사업	단양	상진	2,451,754	․지질공원 탐방객센터 신축 부지 내에 적정 규모의 주차장이 확보되지 못하는 점에 대한 지역주민 우려를 전달하면서 상진초등학교․NH농협마트 주차장, 하상 주차장 등 주변 주차시설을 활용할 수 있는 방안과 대책을 세심히 수립할 것을 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
20	2020 단양군 공공미술 프로젝트 (상진, 별곡)	단양	별곡	400,000	․포토존 조형물 앞면과 뒷면에서 사진촬영이 가능한 점을 상기하면서 성신양회 사택부지 벽면과 사면을 포토존과 어울리도록 정비할 것과 청결한 관리에 만전을 기할 것을 주문. ․관광객에게 자연스럽게 단양팔경을 홍보하고 알아보기 쉽도록 조형물에 게시된 단양팔경 사진에 단양팔경 안내 명찰을 부착할 것을 주문.
21	공공건축물 그린리모델링 사업 (단양군립 노인요양병원)	단양	별곡	1,833,109	․산업안전보건기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)에 낙하물 방지망 설치는 높이 10M 초과로 추락 및 낙하 등 재해 위험이 발생 될 우려가 있을 시 설치한다고 규정되어 있음을 지적하면서 자재 등 낙하물의 낙하 및 근로자의 추락 등 재해 예방을 위해 낙하물 방지망 설치 기준을 준수하여 사업을 추진할 것을 주문. ․공공건축물 리모델링 시 건축의 디자인적 요소만큼 리모델링 사업의 효과성․완성도 및 시설의 실용적 관리 측면도 중요함을 강조하면서 부실시공이 발생하지 않도록 철저한 공사관리 감독에 만전을 기할 것을 당부. ․장례식장 남․여 화장실 냄새에 대한 이용자의 불만사항을 전달하면서 화장실 냄새의 발생원인을 찾아 냄새가 나지 않도록 정비할 것을 주문.
22	만천하 스카이워크 모노레일 스크린도어 설치공사	적성	애곡	200,000	․당초 만천하스카이워크 모노레일 설치사업에 스크린도어 설치공사를 포함하여 설계에 반영하지 못하고 별도로 스크린도어 설치공사를 시행함으로써 결과적으로 예산을 절감하지 못한 점을 지적하며 향후 동일한 사업 추진 사례가 발생하지 않도록 업무추진에 철저. ․경험치 부족으로 실제 모노레일을 운행하면서 발생하고 있는 일부 레일 구간의 문제점 등에 대해서는 탑승객 안전을 최우선 고려하여 모노레일 운행에 차질이 없도록 조속히 정비할 것을 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
23	애곡 소하천 정비사업	적성	애곡	1,140,000	․제방도로의 높이를 높이지 않고 하천 바닥을 낮추어 시공하는 등 애곡리 주민의 건의 사항 및 현지 여건을 충분히 고려하여 사업을 추진함으로써 사업의 효과성을 제고하고 주민 만족도가 우수한 사업으로 격려
24	하진 위험도로 개선공사	적성	하진	5,000,000	․교차로로(하진리에서 하진교 방향, 현곡리에서 하진교 방향) 진입하는 차량의 시야가 충분히 확보되도록 절개면 선형 개량에 각별하게 유의하여 사업을 추진할 것을 주문. ․교통안전을 위해 도로 절개면에서 발생할 수 있는 낙석이나 산사태를 방지할 수 있도록 적절한 절개면 보호공법 선정 및 시공을 당부.
25	별다른 동화마을 조성사업	단성	외중방	5,700,000	․택지 조성용 보강토 블럭 색상이 회색으로 인공적 느낌이 너무 강해 주변 경관과 조화는 물론 별다른 동화마을 컨셉과도 이질감이 있음을 지적하면서 적절한 보완 및 개선 대책을 주문. ․주거시설 건축의 경우 동화마을 건축 가이드라인을 준수하면서 분양자가 직접 시공하면 분양자의 주거 취향에 맞게 건축할 수 있고, 관급공사보다 건축단가를 절감할 수 있는 등의 이점이 있어 단양군과 분양자 모두 만족도를 높일 수 있음을 대안으로 제시하면서 택지 분양 후 분양자가 직접 주거시설을 건축하는 방안에 대해서 적극 검토할 것을 주문. ․동화마을 건축 가이드라인은 동화정원 등 휴양시설과 전시학습시설의 조경계획과 접목이 필요함을 지적하면서 조속히 특색있는 동화마을 건축 가이드라인을 마련하여 사업의 완성도 제고를 주문. ․동화마을 조성 사업부지 내 도로는 향후 확장성을 고려할 필요가 있음을 지적하면서 이를 감안하여 주거시설의 적절한 배치를 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
26	농촌자원 활용 치유프로그램 보급시범	적성	상1	100,000	․치유프로그램 세부 계획수립, 홈페이지 구축 및 홍보물 제작 등 연내에 사업을 내실 있게 마무리하고, 많은 주민의 참여 속에 본 사업이 원활히 운영되고 마을 공동체가 활성화될 수 있도록 지도 감독 철저
27	소선암 치유의 숲 조성사업	단성	대잠	1,373,540	․치유센터로 접근하는 진입도로 확장 및 노면 정비 주문 ․새로운 관광자원으로 개발이 기대됨. 타 지역 벤치마킹 등을 통해 향후 운영 계획 수립에도 만전을 기할 것을 당부.
28	단성(옛단양) 생태공원 조성사업	단성	북하	2,300,000	․생태공원 습지 조성과 관련하여 습지에 원활하게 하천수가 공급될 수 있도록 하천수가 유입되는 유공관의 추가 시공을 주문하고, 친수공간의 안전성을 고려하되 습지 관리 및 수변 자원의 생태적 여건 등을 고려하여 당초 설계에 반영된 습지 내 물 높이 50cm가 적정한지 세심히 검토하여 필요시 상향 조정될 수 있도록 주문. ․본 사업이 완료되면 당초 사업의 목적과는 달리 별곡생태체육공원의 사례처럼 무분별한 차박(여행할 때에 자동차에서 잠을 자고 머무름) 및 캠핑카 진입이 우려됨을 상기면서 이에 대한 대책 마련 수립을 주문. ․폐철도 관광자원화 사업으로 개발될 단성역 주변과 옛단양 생태체육공원과의 관광객 보행 연결로 확보계획도 장기적으로 검토할 것을 당부. ․북하리 죽령천 하류에 퇴적되어 있는 토사로 인하여 집중호우시 북하리 지역이 침수될 우려가 있음을 지적하면서 사업장의 준설토를 이용하여 북하리에서 진입하는 생태공원 진출입로 정비 주문.
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
29	사인암관광지 관광명소화 사업 탐방로 조성공사	대강	사인암	465,322	․특기사항 없음.
30	하나의 자연이 품은 단양영월 한줄기 한자락	영춘	의풍	2,000,000	․의풍리 마을에서 테마길로 진입하는 안내표지판 설치와 진입로 정비를 주문. ․의풍리 마을까지 탐방객을 유도하여 농산물판매 등 주민소득과 연계될 수 있게 함으로써 자연스럽게 야자매트 포장이 시공되는 테마길 구간의 제초작업 및 관리를 마을회와 연계하여 관리할 수 있는 방안 마련. ․경사진 데크길에 미끄럼방지판 설치 주문.
31	북벽지구 테마공원 조성사업	영춘	상	9,200,000	․가족단위 관광객을 유인할 수 있는 주요시설 구성에 만전 ․메인시설인 북벽센터 내에 조성될 수석전시관의 운영에 대해서 특위 위원님들의 많은 우려가 있음을 상기하면서 향후 특색있는 수석전시 계획과 세심한 수석전시관 운영계획 수립에 철저를 기할 것을 주문.
32	단양 열린관광지 (온달관광지)	영춘	하	196,000	․남녀 장애인 화장실에 장애인 도움․호출콜이 미설치 되어 이용자의 위급사항 발생 시 대처가 미흡할 수 있음을 지적하면서 장애인 도움․호출콜 설치를 주문. ․남자화장실 내부 걸래받이 떨어짐, 일부 변기 파손 등은 경미한 사항은 조속히 조치할 것을 주문하면서 공사자재의 세심한 선택, 선진사례 벤치마킹을 통한 시설의 사업성 제고, 견실시공을 위한 철저한 현장 지도 감독에 각별한 유의가 필요함을 강조.
33	온달 열린관광지 개선공사	영춘	하	230,846
연번	사업명	위치		사업비 (예산액)	점검사항 및 지적(개선)사항
		읍면	리
34	산사태 수해복구 공사(영춘 장발지구)	영춘	하	2,783,295	․영춘면 하리 산62번지 수해복구현장은 현지 지형 여건상 우기시 배수로 바닥 파임․쓸림 현상이 우려됨을 지적하면서 물의 흐름이나 물길이 안정화될 수 있도록 추가적으로 돌붙임 시공을 주문하고 낙차공 설치도 함께 검토할 것을 당부.
35	방북천 재해복구사업	어상천	방북	219,698	․특기사항 없음.
36	남한강 어우름길 조성사업	단양	별곡	3,000,000	․주민들이 현장 접근이 많은 사업장으로 자재관리 등 지도․감독 철저 ․교량의 시멘트 타설 시에는 반드시 감독공무원 입회하에 이상없음을 확인 후 시멘트 타설이 될 수 있도록 주문.