제320회 단양군의회 (임시회)

현지점검 특별위원회 활동

2023. 9. 7.(목) ~ 9. 11.(월)

	2023년도 주요사업장 현지점검
7
		결 과 보 고 서

주요사업장 현지점검 특별위원회

	2023년도 주요사업장 현지점검
7
		결 과 보 고 서

1. 제 출 자: 오시백 의원 외 5인

2. 제출 및 회부일자

가. 제출일자: 2023년 9월 6일(화)

나. 회부일자: 2023년 9월 7일(수)

3. 상정 및 활동경위: 제320회 단양군의회 임시회

가. 제1차 ~ 제2차 주요사업장 현지점검 특별위원회: 2023. 9. 7.(목)  ~  9. 8.(금)

‣ 주요사업장 23개소 현지점검: 사업별 추진상황 청취, 문제점 확인 및 대안도출․개선요구 등

나. 제3차 주요사업장 현지점검 특별위원회: 2023. 9. 11.(월)

‣ 주요사업장 3개소 현지점검: 추진상황 청취, 위원회 활동결과 의결 (제도개선, 대안제시, 개선요구 등)

합계	주요사업장 현지점검 일정․현황 / (단위: 건)						비고
	1차 활동		2차 활동		3차 활동
	계	부서별	계	부서별	계	부서별
26	10	농촌(1),문화(1),체육(1),농기(1),안전(3),환경(1),경제(1),균형(1) ‘영춘,어상천,매포,단양’	13	관광(5),안전(5),상하(2) 산림(1) ‘단양,적성,단성,대강’	3	보건(1),균형(1),문화(1) ‘단양’

4. 주요사업장 현지점검의 주요내용

❍ 주민 삶의 질 향상, 정주여건 개선을 위한 중․대규모 지역개발 사업의 전반적 시공 상황을 확인하고, 추진 미흡, 시행과정에서 예상‧도출된 개선사항과 문제점은 합리적 보완대책 및 신속한 개선 조치를 당부하면서, 요구 과정과 결과에 있어 공공․효용성 실현 등 현안 사업의 완벽한 마무리를 지원하고 독려하기 위함임.

5. 점검대상

❍ 총괄(건): 시루섬 생태탐방로 조성(계속비) 사업 등 총 26개 사업

※ 총 사업비: 169,861백만원/ 평균 공정률: 62% (준공 사업장: 4개소)

사업별 구분: 시설비 24건 / 민간자본사업보조 2건 (문화예술과, 균형개발과 소관)

❍ 부서별: 문화예술과 외 12개 부서

합계		부서별 현지점검 대상 현황 (단위: 건/백만원/%)													비고
		문화예술	관광	경제	체육레저	균형개발	안전건설	농업축산	농촌활력	산림녹지	환경	상하수도	농업기술	보건위생
건수	33건	2건	7건	1건	1건	2건	8건	2건	4건	1건	1건	2건	1건	1건
예산 (%)	183,054	4,180	30,000	250	1,800	25,124	80,380	2,943	5,150	500	11,455	3,866	857	16,549

붙임  2023년도 주요사업장 현지점검 결과목록 명세표 1부.  끝.

□ 2023년도 주요사업장 현지점검 및 확인결과 목록 명세표

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

1

농촌활력과

수석전시관 실내건축공사

(사업비/공정률) 1,500백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 12. ~ ’23. 7. 20. <준공>

(내용) 실내 인테리어공사 1식

※ 집행액: 886백만원

영춘

상리

□ 천정 마감이 배관 시설 등의 노출로 미관을 훼손하고 있어 관련법이 허용하는 범위 내에서 개선 필요성을 주문

□ 냉난방 공조기가 설치돼 있음에도 추가로 에어컨을 비치하는 등, 시설 규모에 맞는 설비 설치가 가능했음에도 간과되어 아쉬운 점으로 확인하면서, 향후 사업추진 시에는 설계안의 면밀한 검토를 당부

□ 2층 카페 공간의 개방문 개폐 상태를 다시 살펴야 할 필요성과 준공 후 사용개시 전, 선제적 안전관리 조치를 주문

□ 관람 동선을 표시해 전시 관람에 혼동이 없도록 준비하고, 수석 작품 외 다른 볼거리도 함께 마련해 줄 것을 제시

□ 향후, 관련 조례 제정을 통한 위원회 구성 등 계획된 절차를 조속히 마무리하여 운영 방향과 홍보계획 수립 등 개관 준비에 만전을 기하여 줄 것을 당부

2

문화예술과

전통사찰 구인사 보수정비사업

(사업비/공정률) 500백만원(자부담50) / 15%

(사업기간)  ‘23. 6. ~ ’23.10.

(내용) 구인사 주변 정비사업 1식

→ 기와 보수 및 단청, 계단, 석물 보수

※ 집행액: 144백만원

영춘

백자

리

□ 구인사 경내 기와 파손 및 흘러내림으로 안전상 위험성이 높은 관성당 시공 현장을 확인하면서, 완결성 있는 마무리와 작업장 내 철저한 안전관리를 당부

□ 구인사 참배객 및 관광객들의 안전문제와도 직결되는 보수사업으로 보조금 예산의 편성 및 지원계획 등 사업의 목적성에 기반한 성과 창출이 될 수 있도록 민간에 대한 보조지원사업 관리에 만전을 기하여 줄 것을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

3

체육레저과

산악레포츠(MTB)시설 개발

(사업비/공정률) 1,800백만원 / 99%

(사업기간)  ‘22. 5. ~ ’23. 7.<준공>

※ 착공일: ‘22.6.29. / 준공일: ’23.7.28.

(내용) 산악자전거 코스 정비(4개 코스)

관리동 1동 신축(지상1층/ 연면적157㎡)

※ 집행액: 958백만원

영춘

하리

□ 당초 계획된 산악자전거 코스 개발 및 모노레일 설치사업 등이 현장여건 등을 반영하여 축소된 점을 확인하면서, 조성된 편의시설에 대한 이용 시 주의사항 및 안전수칙 안내판 설치 등의 필요성을 강조

□ 단양을 찾는 동호인들이 많은 상황에서 시설 관리 등 운영방안을 조속히 마련하여 시설이 방치되지 않도록 다각적인 홍보 활동 및 프로그램 운영을 주문

4

농업기술센터

농기계 임대사업소 어상천지소 신축공사

(사업비/공정률) 857백만원 / 60%

(사업기간)  ‘22. 11. ~ ’23. 11. 06.

(내용) 임대창고 및 콩선별장 신축

※ 집행액: 460백만원

어상천

임현

리

□ 사업소의 배치구상, 내용 등 사업 시행 전후 의회의 현지 점검 등의 절차가 이미 진행되었된 사항임을 확인하면서,

□ 사업준비단계에서 이미 임대사업소 내 육묘장 설치를 고려했음에도, 배수 계획고(경사도)를 반영하지 못한 설계를 이유로 예산을 수반하는 사업 변경을 추진하는 점 등을 문제점으로 지적하면서

□ 설계의 구체적이고 세심한 검토가 미흡했던 부분에 대해서는 대안 마련을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

5

안전건설과

매포읍 삼곡천(철도횡단구간) 재해복구사업

(사업비/공정률) 11,182백만원 / 10%

(사업기간)  ‘22. 3. ~ ’26. 9.

※착공일: ‘22.12.29. / 준공예정: ’26.9.9.

(내용) 수로용 터널 강관추진

(D=3,000mm 4열 L=120m

※ 집행액: 6,092백만원

매포

삼곡

리

□ 중앙선 철도 하부를 터널로 굴착하는 공사를 진행하던 중 지중 콘크리트 구조물이 발견되어 공법 변경이 불가피했던 공사 지연 상황을 확인하면서,

□ 한국철도공사와 국가철도공단과의 인허가 절차가 마무리됨에 따라, 지연된 계획공정을 만회하기 위한 사업절차 이행에 신속성을 기하여 줄 것을 주문

6

안전건설과

평동지구 풍수해생활권 종합정비사업

(사업비/공정률) 11,431백만원 / 5%

(사업기간)  ‘20. 1. ~ ’27.12.

※착공일: ‘23.5.8. / 준공일: ’27.12.

(내용) 지방하천(대가리천) 및 소하천(도곡천) 정비,         시가지 우수관로 정비

※ 집행액: 9,047백만원

매포

평동

리

□ 상습적인 침수피해 발생 지역의 피해 예방을 위한 중장기 종합정비계획으로

□ 올해 계획된 상가와 주거밀집 지역의 공사 구간은 장비 등을 최대한 동시 투입하여 단기간 마무리될 수 있도록 사전에 철저한 준비를 주문

□ 향후, 공사가 마무리되면 복개교 상부는 주민접근성과  활용성이 좋은 공간인 만큼, 주민 쉼터 등으로 활용될 수 있도록 대안 마련 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

7

안전건설과

도곡소하천 정비사업

(사업비/공정률) 11,327백만원 / 0%

(사업기간) ‘23.10.~’25.12. *실시설계중

※ 착공예정: ‘23.10. / 준공예정: ’25.12.

(내용) 호안블럭 3,440m, 교량(박스) 15개소,보 4개소 등

※ 집행액: -백만원

매포

도곡

리

□ 사업 시행으로 편입되는 사유지 수용은 부지 형상 및 장래 이용에 따른 매도자(주민)의 입장을 고려, 분할 매입보다는 전체 매입을 우선 고려되어야 할 필요성이 있음을 주문

□ 사업추진 지연을 이유로 토지보상 후 수용된 토지가 기존 용도로 계속 활용되지 않도록 사전 조치 당부

8

환경과

단양군 매립시설 증설사업(2단계)

(사업비/공정률) 11,455백만원 / 0%

(사업기간)  ‘23. 7. ~ ’24. 12. 30.

(내용) 매립지 조성 17,447㎡,

매립 용량 205,609㎡

※ 집행액: 2,995백만원

매포

하괴

리

□ 현재, 매립시설 2단계 증설사업이 사업 변경 승인 절차 진행으로 지연되고 있는 상황임을 확인하면서, 9월 승인을 목표로 10월부터는 사업이 본격 추진될 수 있도록 차질없는 준비를 당부

□ 현 매립시설의 포화상태를 직접 현장 확인하면서, 군민을 대상으로 쓰레기 배출에 대한 경각심을 일깨우는 현장 견학 및 교육 장소가 될 수 있도록 프로그램 운영 방안 검토 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

9

경제과

전통시장 노후전선 정비사업

(사업비/공정률) 250백만원 / 10%

(사업기간)  ‘23. 5. ~ ’23. 11.

※ 착공일: ;23.7.25. / 준공예정: ‘23.11.21.

(내용)  구경시장 개별점포 노후전선 정비

※ 집행액: 99백만원

단양

도전

리

□ 전기설비 노후화 등으로 화재에 취약한 구경시장 내 개별점포의 전선을 일제 정비하는 사업으로,

□ 현재 공정률이 10%에 그치고 있는 점을 상기하면서, 상인회와 협조하여 정비대상 점포의 신속한 참여를 독려하여 화재 예방의 실효성 강화를 주문

□ 아울러, 구경시장 내 미관을 해치는 통신선도 함께 정비될 수 있는 방안 마련 주문

10

균형개발과

단양읍 별곡리 지중화 사업

(사업비/공정률) 2,924백만원 /80%

* 단양군50%, 한국전력공사‧통신사(5개업체) 50%

(사업기간)  ‘22.10 ~ ’24. 1.

※ 착공일: ‘22.10.19. / 준공일: ;24.1.

(내용) 전선 및 통신선 지중화  L=300m

굴착거리 L=1,545m

→ 전주 32본 철거, 지상기기 10대 설치 등

※ 집행액: 1,409백만원

단양

별곡

리

□ 지중화 사업 관로 및 지상기기 설치가 완료된 상황에서 자재 수급문제와 긴 장마철, 주변 건물주와 세대주 요구사항 검토로 일정이 지연되고 있는 상황임을 확인하면서,

□ 사업 지연에 따른 민원 해소에 방점을 두고, 통신사 간 조율을 통한 협조로 조기에 사업이 마무리 될 수 있도록 적극적인 역할을 주문

□ 지중화사업 과정에서 설치된 지상기기가 자칫 흉물로 방치될 수 있어 관광단양을 홍보할 수 있는 시설로 적극 활용되도록 대안 제시

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

11

관광과

시루섬 생태탐방교 건립사업

(사업비/공정률) 15,000백만원 / 30%

(사업기간)  ‘21. ~ ‘24.(4년)

※ 착공일: ‘20.3.31./ 준공: ’24.12.예정

(내용) 생태탐방교 건립(보행용 현수교)

L=590m, B=1.8m

→ 남한강 수위 상승(EL 135.5↑) 사업 지연

※ 집행액: 2,414백만원

단양

증도

리

□ 홍수위 상승으로 열악한 공사현장여건을 직접 확인하면서, 시공 중인 구조물의 앵커볼트 나사 부분이 녹이 심한 상태로 노출되어 있어 관리가 다소 미흡함을 지적하면서 녹을 제거한 후 커버를 씌우는 방식으로 안전 조치 당부

□ 남녀노소 누구나 보행이 가능토록 현수교의 출렁거림을 최소화할 수 있도록 하는 방안도 함께 검토

□ 경관조명 사업도 동시 추진하여 계획된 공정기간 내 마무리 될 수 있도록 사업 관리에 만전을 기하여 줄 것을 주문

12

관광과

시루섬 생태탐방로 조성사업

(사업비/공정률) 4,000백만원 / 30%

(사업기간)  ‘20. ~ ’24(5년)

※ 착공일: ‘22.3.10./준공일: ’24.12.예정

(내용) 생태탐방로 L=1.0㎞, 습지관찰대 1개소     → 남한강 수위 상승(EL 135.5↑) 사업 지연

※ 집행액: 1,182백만원

단양

증도리

□ 16번, 시루섬 생태탐방교 건립사업과 연계 추진 사업

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

13

관광과

시루섬 주변 관광명소화 사업

(사업비/공정률) 2,000백만원 / 0%

(사업기간)  ‘23. 10. ~ ’24. 7.

※ 착공: ‘23.10.예정 / 준공: ’24.7.예정

(내용) 주차장 조성(대형 포함 306대)

※ 집행액: -원

적성

애곡

리

□ 그간 소규모환경영향평가 승인 및 농지협의, 토지수용 절차 등으로 사업이 지연되고 있는 상황을 확인하면서, 내년 준공을 목표로 사업이 본격 추진될 수 있도록 차질없는 준비를 당부

□ 조성될 주차장과 도로를 두고 마주하게 될 호빗마을 간 안전한 통행을 위한 방안(구름다리 등) 함께 마련 주문

□ 아울러, 현 상황에서는 어려움이 있겠으나 향후 애곡리 일원 민간사업 추진 시(민간사업자 계약체결 시 조건 등) 이끼터널을 우회하는 진출입로 개설 필요성 강조(※중장기 과제)

14

안전건설과

적성하진 위험도로 개선공사

(사업비/공정률) 7,800백만원 / 80%

(사업기간)  ‘19. ~ ’23.

※ 착공일: ‘19.4.15./ 준공예정: ’23.11.11.

(내용) 도로개설L=540m B=8.0m

(교량 L=110m B=11.0m, 터널 L=60m)

→ 안전관리계획 변경 수립에 따른 공사중지       (‘22.9.28.) 후 해제(’23.8.30.) *재착공

※ 집행액: 6,666백만원

적성

하진리

□ 그간 사업장 붕괴 등으로 시공방법 변경 및 안전관리계획 변경 수립 이행으로 공사중지 후 재착공하는 등 어려움이 많았던 동 사업장의 마무리 공정을 직접 확인하면서,

□ 안전사고 예방을 위해 터널 내 인도 설치 및 비탈면 미끄럼 방지턱 설치, 원활한 배수 처리, 조명시설 설치의 필요성을 주문

□ 그 외, 인도가 없거나 인도 폭이 좁은 구(舊) 교량의 구조적인 문제로 추가 설치를 위한 공법 모색 및 예산 확보 등으로 난항을 겪고 있는 상황에서, 보행자 안전을 배려한 인도를 포함한 구조의 교량을 선제적으로 설치한 점은 우수 추진 사례임

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

15

안전건설과

하진위험도로 구조개선사업

(사업비/공정률) 2,900백만원 / 98%

(사업기간)  ‘21. ~ ‘23.

※착공일: ’21.3.7. / 준공일: ‘23.10.23.

(내용) 도로개설 L=130m B=8.5m

※ 집행액: 2,474백만원

적성

하진

리

□ 준공을 앞둔 시점에서 도로 통행에 문제가 없도록 사업장 마무리 관리에 만전을 기하여 줄 것을 주문

16

상하수도과

지방상수도 확장공사(상리, 현곡리, 의풍리)

(적성면 상리)

- 사업비/공정률: 300백만원 /100%

- 사업기간: ‘22.~’23. <준공>

- 내용: 송‧배수관로 L=2㎞,물탱크(20톤) 1개소

(적성면 현곡리)

- 사업비/공정률: 100백만원 /95%

- 사업기간: ‘22.~’23. <준공>

- 내용: 배수관로 L=0.5㎞,가압장 1개소

(영춘면 의풍리)

- 사업비/공정률: 3,249백만원 /100%

- 사업기간: ‘17.~’23. <준공>

- 내용: 소백산권역 삼도접경사업

적성

상리

‧

현곡리

□ 그간 공사 지연에 따른 주민 불편(한전 단가 상승, 통행 등)을 해소할 수 있도록 조속한 마무리 당부

영춘

의풍

리

□ 소백산권 삼도접경사업으로 추진되었던 의풍리 상수관로 확장공사가 마무리되었음에도 당초 급수공사 신청 및 납부완료한 가구(139가구) 중 현재까지 미급수 가구(16가구)가 있음을 확인하고,

□ 진행 상황에 대한 주민 설명이 부족했음을 지적하면서,  주민 이해와 대안 마련을 통한 조속한 진행을 당부

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

17

안전건설과

단성면 농어촌도로 203호 개설사업

(사업비/공정률) 1,000백만원 / 계약구간 90%

(사업기간)  ‘22. 11. ~ ‘24. 12.

※착공일: ’22.12.9./준공예정: ‘23.12.(계약구간)

(내용) 도로확포장 L=325m, B=6.5m

(계약구간 L=129m)

※ 집행액: 205백만원

단성

외중방리

□ 1구간은 착공, 2구간은 토지 협의 진행 중임을 확인하고 신속한 마무리 당부

18

산림녹지과

소선암자연휴양림 리모델링 공사

(사업비/공정률) 500백만원 / 100%

(사업기간)  ‘23. 4. ~ ’23. 6. <준공>

(내용) 숲속의 집 18동 리모델링

※ 집행액: 388백만원

단성

대잠리

□ 특이의견 없음

※ 다만, 사업장 점검대상 동선 구간에 있는

- 백두대간문화휴양관의 경우, 지속 제기된 누수 문제가 여전히 개선되지 않고 있는 점을 지적하면서, 누수의 근본적 해결과 숙소 내부 시설물 점검 및 관리(공실 시 냉장고, 에어컨 등 전원 차단 포함)를 주문

- 치유의 숲은 상하수도 인입공사와 진입로 확포장 공사 마무리 후 내년 5월 개장 계획을 확인하고, 이용 활성화 방안 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

19

안전건설과

궁기천 정비사업

(사업비/공정률) 1,600백만원 / 70%

(사업기간)  ‘23. 3. ~ ‘24.2.

※착공일: ’23.3. / 준공예정: ‘24.2.

(내용) 제방축제 및 보축, 낙차보 재설치 5개소,          암거 3개소, 역T옹벽 L=63.4m

※ 집행액: 728백만원

단성

벌천리

□ 진출입로, 경사, 선형 등 모든 상황적 요인을 고려했을 때 교량 위치 선정의 문제점을 지적하면서,

□ 잔여공정 사업추진에 있어서는 설계의 세심한 검토와 현장여건을 고려한 편의성과 안전성을 갖춘 시설이 될 수 있도록 시공에 만전을 기하여 줄 것을 주문

20

상하수도과

당동마을 하수관로 정비사업

(사업비/공정률) 217백만원 / 80%

(사업기간)  ‘23. 6. ~ ’23. 11.

※ 착공일:‘23.6.20. / 준공예정: ’23.11.16.

(내용) 하수관로 L=256m, 중계펌프 1개소

※ 집행액: 116백만원

대강

당동리

□ 그간 공사 지연에 따른 주민 불편(한전 신청 지연, 통행 등)을 해소할 수 있도록 조속한 마무리 당부

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

21

안전건설과

장림지구 풍수해생활권 종합정비사업

(사업비/공정률) 33,140백만원 / 5%

(사업기간)  ‘22. 12. ~ ’26. 9.

※ 착공일: ‘22.12.29. /준공예정: ’26.9.9.

(내용) 지방하천정비 3.28㎞, 소하천정비 0.8㎞,         교량 3개소, 우수관로 정비 0.3㎞,

사방댐 2개소, 고지배수로 1,04㎞ 등

※ 집행액: 2,000백만원

대강

장림리

□ 상습적인 침수피해 발생 지역의 피해 예방을 위한 중장기 종합정비계획으로

□ 현장여건을 반영한 공법 적용 등 견실한 시공이 될 수 있도록 계획된 공정 관리에 만전을 기하여 줄 것을 주문

22

관광과

단양강 잔도주변 녹화공간 조성

(사업비/공정률) 1,500백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22.  ~ ’23.(2년) <준공>

※ 착공일: ‘22.4.18. / 준공일: ’23.8.18.

(내용) 수로암거(5.0×5.0) L=60m

수로덮개(6.0×2.25) L=37m

방류수로 주변 초화류 식재 A=1,997㎡

※ 집행액: 750백만원

단양

상진리

□ 잔도 이용자들의 시각적 동선을 고려하여 경관 개선이 미흡한 공간에 대한 추가 초화류(억새) 식재 계획을 확인하고,

□ 장래 동 사업지를 통과 예정인 에코순환루트를 고려하여 식재된 홍단풍 및 초화류 등의 유지관리 방안 마련 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

23

관광과

도담정원 조성사업

(사업비/공정률) 900백만원 / 50%

(사업기간)  ‘22. ~ ’24.(3년)

※ 착공일: ‘23.3.22. / 준공예정: ’24.11.

(내용) 계절초화류 정원 조성 A=40,000㎡

※ 집행액: 277백만원

단양

도담리

□ 우박, 집중호우 등 자연재해와 잡초 관리의 어려움에 공감하면서,

□ 현장여건을 반영하여 면적 축소나 수종 변경 등 선택과 집중을 통해 특색있는 경관자원으로 자리매김할 수 있도록 노력을 다하여 줄 것을 주문

24

보건위생과

단양군보건의료원 건립사업

(사업비/공정률) 16,549백만원 / 90%

(사업기간)  ‘19. ~ ’23.(5년)

※착공일: ‘21.11.29. / 준공예정:’23.9.15.

(내용) 건축연면적 2,995.73㎡

지하1층, 지상2층/ 30병상

※ 집행액: 10,676백만원

단양

상진리

□ 응급차량 진입로와 일반차량 주차 진입로 동선이 겹쳐 불편이 예상되는 바, 응급차량 정차구간 내 태양광 주차공간에 대한 일반주차 이용제한 등 대안 마련 주문

□ 2층 옥상 유휴공간에 대한 활용방안(옥상정원, 환자쉼터, 휴게소, 건강검진센터 증축 등) 마련 주문

□ 기존 진료과 외 4개 추가 진료과목(응급의학과, 내과, 정신의학과, 마취통증의학과)에 대한 홍보 강화 및 의료인력 확보 등 개원 준비에 노력을 다하여 줄 것을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

25

균형개발과

※주관부서: 문화예술과

올누림 행복가족센터 건립사업

(사업비/공정률) 22,200백만원/80%

(사업기간)  ‘20. 9. ~ ‘24. 1.

※ 착공일: ’22.11.22. / 준공예정: ‘24.1.18.

(내용) 문화 및 집회시설

(지상4층 / 연면적 6,255.12㎡)

※ 집행액: 2,373백만원

단양

별곡리

□ 신축되는 문화복합시설의 규모 대비 계획된 주차장 확보면수가 20면 정도로 협소, 장래 주차장 수용력 부족이 예견되므로 대안 강구 및 부족한 주차장 수요 대응을 위한 인근 공유지 활용방안 검토 주문

□ 작은영화관 상영관(2개관) 중 1개관은 리클라이너 좌석이 아닌 일반 관람석으로 계획된 바, 주민 문화 욕구 충족 등 수요를 반영하여 리클라이너 좌석으로 통일 검토 주문

□ 설치된 낙하방지망 등 안전성 미흡 사항이 확인되므로, 산업안전관리 기준에 적합하도록 현장관리 및 감독 강화에 만전을 기할 것을 주문

26

문화예술과

청소년수련관 리모델링

(사업비/공정률) 3,680백만원/30%

(사업기간) ‘23.~’24. 6.

(내용) 교육연구 및 복지시설(연면적 5,088.93㎡)

리모델링(지하1~지상3), 수직 증축 (지상1~2층, 90.45㎡)

※ 집행액: 450백만원

단양

도전리

□ 계획된 총 사업비 36억 8천만원 중, 43.5%인 16억이 미확보된 상황으로, 추가 재원(도비_기능보강사업) 확보에 노력을 다하여 줄 것을 주문

□ 리모델링 사업의 신축 대비 효율성에 대한 검토 주문

□ 청소년수련관 주변은 상시 주차난이 심각한 상황으로 주변 KBS 부지를 활용한 주차장 조성 검토 주문