제312회 단양군의회 (임시회)

현지점검 특별위원회 활동

2022. 10.19.(수) ~ 10. 24.(월)

	2022년도 주요사업장 현지점검
7
		결 과 보 고 서

주요사업장 현지점검 특별위원회

	2022년도 주요사업장 현지점검
7
		결 과 보 고 서

1. 제 출 자: 김영길 의원 외 5인

2. 제출 및 회부일자

가. 제출일자: 2022년 10월 18일 (화)

나. 회부일자: 2022년 10월 19일 (수)

3. 상정 및 활동경위: 제311회 단양군의회 임시회

가. 제1차 ~ 제3차 주요사업장 현지점검 특별위원회: 2022. 10. 19.(수)  ~  10. 23.(일)

‣ 주요사업장 34개소 현지점검: 사업별 추진상황 청취, 문제점 확인 및 대안도출․개선요구 등

나. 제4차 주요사업장 현지점검 특별위원회: 2022. 10. 24.(월)

‣ 주요사업장 3개소 현지점검: 추진상황 청취, 위원회 활동결과 의결 (제도개선, 대안제시, 개선요구 등)

합계	주요사업장 현지점검 일정․현황 / (단위: 건)								비고
	1차 활동		2차 활동		3차 활동		4차 활동
	계	부서별	계	부서별	계	부서별	계	부서별
37	9	관광(2),균형(1),환경(1)안전(4),농촌(1) ‘단성, 적성’	16	관광(10),산림(1),균형(1) 안전(1), 보건(1), 농촌(2) ‘대강,단성,단양,가곡’	9	관광(2),균형(1),산림(2) 안전(2),기술(1),농촌(1) ‘영춘,어상천,매포’	3	균형(2), 안전(1) ‘단양’

4. 주요사업장 현지점검의 주요내용

❍ 주민 삶의 질 향상, 정주여건 개선을 위한 중․대규모 지역개발 사업의, 전반적 시공상황을 확인하고추진 미흡, 시행과정에서 예상 및 도출된 개선사항과 문제점은 합리적 보완대책, 신속한 개선 조치를 요구 과정과 결과에 있어 공공․효용성 실현 등 현안 사업의 완벽한 마무리를 지원, 독려하기 위함임

5. 점검대상

❍ 총괄(건): 시루섬 생태탐방로 조성(계속비) 사업 등 총 37개 사업

※ 총 사업비: 162,163백만원(예산현액 기준) / 평균 공정률: 71.8% (준공 사업장: 13개소)

사업별 구분: 시설비 36건 / 민간자본사업보조 1건 (기술지원과 소관)

❍ 부서별: 관광정책과 외 8개 부서

합계		부서별 현지점검 대상 현황 (단위: 건/백만원/%)								비고
		관광정책	환경	산림녹지	균형개발	안전건설	기술지원	보건위생	농촌활력
건수	37건	15건	1건	3건	5건	8건	1건	1건	3건
예산 (%)	162,163	43,749	3,850	10,738	28,450	48,360	70	16,594	10,352
	100%	27.0%	2.4%	6.6%	17.5%	29.8%	0.0%	10.2%	6.4%

붙임 2022년도 주요사업장 현지점검 결과목록 명세표 1부.  끝.

□ 2022년도 주요사업장 현지점검 및 확인결과 목록 명세표

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

1

환경과

ASF 확산방지 울타리 설치사업 (6구간)

(사업비/공정률) 3,850백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ ’22. 3. 30. <준공>

(내용) 산78 ~ 90번지 2.5km구간 철조망 설치

※ 전체구간: 장회~두음리 35km

집행액: 2,859백만원

단성

가산리

‣설치 울타리 전도 방지를 위해 토사유출 등 취약구간을 중점으로 한 점검, 시설 보강에 신속한 대응력 확립을 주문

‣그 외 주민․농경지 피해 최소화를 위한 현장 상담의 합리적 설치안 구상,  기준 지침보다는 지역 및 상황적 여건을 고려한 설계, 예산 요구로 증액된 국비지원 확보 및

‣설치된 울타리 방지망은 그 견고성이 확인되고, 시설의유지관리에서도 체계성이 확립된, 우수 추진 사례임

2

관광정책과

소선암 오토캠핑장 편의시설 정비사업

(사업비/공정률) 300백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 4. 18. ~ 6. 20. <준공>

(내용) 캠핑장 내 건물*4종 증축 등

* 관리사무소, 화장․샤워실, 개수대

※ 집행액: 215백만원

단성

상방리

‣2006년 개장된, 노후 시설 정비사업으로 시설이용개의  사용편의 향상 등의 기능개선 필요성을 주문

. 신축 화장실, 개수대 등은 각 시설에 표지판을 부착 이용객 혼동이 없도록 가시성 확보 방안을 주문

. 건물과 이음되는 부분, 건물 지붕에서부터 설치된 우수관로는 시설 바닥에 상시 빗물 고임과 동절기 결빙이 예상되므로 배수관로의 개선이 필요

. 샤워실 이용시 온수 부족에 따른 물 사용에 불편이 없도록 수요량 충족을 위한 온수 용량 확대를 주문

. 캠핑장 우측에 있는 기존 이동식 샤워실, 화장실은 4동은 이미 노후화로 청결성에 직결된 문제가 있어 전면적 시설개선 대책(재 신축)마련, 필요성을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

3

관광정책과

명승문화마을(우탁사색길)조성사업

(사업비/공정률) 2,579백만원 / 70%

(사업기간)  ‘22. 6. ~ 12. 16.

(내용) 탐방로, 사색길 조성 L=1.4km /B=2m

※ 집행액: 2,120백만원

단성

하방리

‣군 관내 대부분의 걷는 길의 주 자재는 데크로 시공됨

‣시설물 유지관리 측면에서 비용증가 수반이 우려

‣관리비․시공 및 내구성이 우수한 자재의 장단점 분석 등을 통한 합리, 선택적 설치로 보수 비용상승 억제의 합리적 시공방안이 적용된 우수 시공 사례로 현지확인

4

농촌활력마케팅과

별다른 동화마을조성사업 (기반시설, 토목)

(사업비/공정률) 7,200백만원 / 80%

(사업기간)  ‘20. 6. 26. ~ ’22. 9. 30.

(내용) 기반시설 조성(토공) A=64,175㎡

※ 군 관리계획(용도, 지구단위)변경예정

→ 충청북도 ‘승인’신청: ‘22. 10.

단성

외중방리

‣현재 토목사업 공정률이 80%로, 현장점검 결과 도출된 주요 사항에 대한 개선 및 대책방안 마련을 주문

. 공용주차장: 주차 간격 비좁음, 진․출입 회전반경고려 미흡 ※ 중대형 차량, 주차장 이용의 불편 예상

. 지구 내 법면 유실 및 녹생토 활착: 호우로 유실된 법․사면 재시공 필요, 녹생토 유실현상, 활착 미흡은 미관저해 및 기능상실을 우려, 개선 조치를 주문

. 인도를 점유한 암반: 공정시, 도출된 암반 파쇄조치 없이 그대로 시공 도출 암반이 인도부지 과반을 점유

※ 안전, 활용성, 미관 확보를 위해 암반 제거를 주문

. 녹화관련: 공용녹지공간 잡풀 등의 무분별한 식생이 우려, 효율적 재산 유지관리 차원의 대책 마련 강구

. 상층부 정자 광장 부근: 부지 좌․우 잔여지 전체를 포함하여 광장  구획을 확장(시공), 활용성 제고 조치

정자 하단부는 보도블럭, 경계석을 시공 미관 개선 및 안전성이 확보 되도록 추가시공․설치를 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

5

안전건설과

적성하진 위험도로 개설공사

(사업비/공정률) 7,300백만원 / 80%

※ 22년도: 2,300백만원

(사업기간)  ‘22. 4. ~ ’23. 1. 11.

(내용) 도로선형개량 L=540m : B=8.0m

교량재가설 L=110m : B=11m

(집행액) 1,460백만원

적성

하진리

‣사업장의 토질 문제로 인한 현장 여건상의 불가피성이 반영된 변경 계획임에는 공감을 하나, 주민 시선에서는 사토의 반입․반출 절토와 되메움이 반복된 사업과정을 불필요한 재정, 낭비 요인으로 판단 할 수 있음에도

‣사업장 붕괴 후, 현재의 대체 시공방안 채택까지 주민들에게 설명이 부족했음을 지적하면서, 주민홍보 강화를 주문

‣설치되는 터널 교량 위 부지 약 60m 구간을 주민 친화공간으로 조성, 적의 제공될 수 있는 방안 마련을 주문

6

안전건설과

위험도로 구조개선 사업

(사업비/공정률) 2,000백만원 / 20%

(사업기간)  ‘22. 3. ~ ’23. 3. 01.

(내용) 도로 선형개량 L = 0.2km

B = 6.5m ~ 8.5m
※ 보상협의 완료 / 집행액:  700백만원

적성

하진리

‣보상 절차가 마무리 됨에 따라, 지연된 계획공정 만회를 위한 사업절차 이행에 신속성을 기하여 줄 것을 주문

‣시공구간 중 절토 사면에는 낙석방지망 설치로 안전관리 강화, 녹생토는 주변과 조화된 미관성에 세심한 시공을

‣시행과정에서 도로 통행에 있어 주민 등의 불편 사항이 없도록 사업장 관리에 만전을 기하여 줄 것을 주문

7

균형개발과

※주관부서: 문화체육과

적성 생활체육공원 정비

(사업비/공정률) 1,000백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 4. ~ 10. 14. <준공>

(내용) 축구장 인조잔디 시공, 주변정비

막구조물, 광장 등 조성

※ 집행액: 673백만원

적성

소야리

‣축구장 정면부 끝 부분 휀스 앞 잔여지는 각종 행사시 부지 이용과 활용성 제고를 위해, 정비할 필요가 있음

부지 평탄화 작업, 벤치 등 시설 이용자의 휴식․편의 제공 시설물 추가설치 개선방안 마련과, 축구장 끝 부분

휀스는 진․출입문 추가 개설로, 이용자의 시설 사용에 있어 접근성 제고가 필요한 시설개선 방안도 함께 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

8

안전건설과

재해복구사업(지방하천)

(사업비/공정률) 18,500백만원 / 62%

(사업기간)  ‘21. 6. ~ ’23. 4. 30.

(내용) 제방 7.3km, 교량  4개소, 보 3개소

※ 계약: 13,466백만원 / 집행: 8,650백만원

적성

상원곡

~

소야리

‣사업 시행에 있어 편입되는 사유지 수용은 부지 형상 및 장래 이용에 따른 매도자(주민)의 입장을 고려, 분할 매입 보다는 전체 매입을 우선 고려되어야 할 필요성이 있음을 주문

‣복구 사업구간, 하천 제방 양안의 밑 하단은 유속으로 인한 쇄굴 현상 방지를 위해 기초블록 보강이 빈틈없이견고히 시공 될 수 있도록 철저한 사업공정관리를 주문

9

안전건설과

파랑천 재해복구사업(소하천)

(사업비/공정률) 4,994백만원 / 60%

(사업기간)  ‘21. 6. ~ ’22. 11. 09.

(내용) 전석 찰 쌓기: L=797m /옹벽: L=152m

둑마루 포장: L=885m

교량 2개소 및 가동보 2개소

※ 집행액: 2,044백만원

적성

파랑리

‣현 재해복구사업 1-1 공구 구간에 시공중인 교각의 상부 하중과 배면 토압을 지지하는 교대 우측면, 하천바닥  사면부에 시공된, 구조물의 아래쪽 일부는

‣콘크리트마감 없이 사면에 그대로 노출되어 하천 유속에 의한 노출부 점진적 유실, 쇄굴 영향은 장래 교각 안전성 등에 영향이 있을 것으로 예상됨

‣시설 안전성 확보와 준공 후 추가적 조치에 따른 예산 소요가 없도록 보완조치 등 개선대책 마련 필요를 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

10

관광정책과

단양강 잔도주변 녹화공간 조성사업

(사업비/공정률) 1,500백만원 / 30%

(사업기간)  ‘22. 4. ~ ’23. 5.

(내용) 하수처리 방류 수로 주변 복원 A=1,997,㎡

방류수로 복개(5.0m×2.7m)L=36m, 수로암거

(5.0m×5.0m) L=80m, 초화류 식재 A=1,997㎡

※ 집행액: 400백만원

단양

상진리

‣수로암거 구조물 위 초화류 등 식재를 목적으로 계획된 녹화공간은 적정 복토 높이를 고려, 합리적 시공을 주문

‣현재 녹화공간으로의 진입로는 고려되지 않음, 장래 동지점과 연결되는 에코순환루트 조성사업 시 진입 계단설치를 고려, 해당 공간으로 접근 동선마련 대안을 주문

‣하수처리장에서 순환처리되 암거로 배출 계획된 방류수의 경우, 우기철 홍수위가 높아질 시, 유속의 정체로 인한악취 발생이 우려됨으로 이에 대한 대책 방안마련 등을 고려해 볼 필요성 있음

‣밀폐된 구조물의 특성상, 구조물 내 유해가스 응축으로 인한 안전사고 발생의 위험이 있음으로, 설치 계획된 배기구 외 추가 배출구 설치 대책 등 방안 마련을 주문

11

관광정책과

시루섬 생태탐방로 조성사업

(사업비/공정률) 19,000백만원 / 10%

(사업기간)  ‘22. 3. ~ ’23. 10.

(내용) 보행현수교 건립 (L=590m / B=1.8m)

※ 남한강 수위 상승(EL 135.5↑)공사중지

집행액: 8,574백만원

단양

증도리

‣홍수위 상승으로 인한 공사중지 상황으로, 수위 하강시 신속한 재 착공으로 계획된 공정기간 내 마무리 될 수 있도록 사업 관리에 만전을 기하여 줄 것을 주문

‣현수교 관람 진입 시점부는 애곡리 지점, 조성계획에 있는 호빗 마을 중심을 통과하여 출입 됨을 설명받음 장래 시설 개장시 차량의 수용 능력 확보를 위한 주차공간 확충과 탐방 동선의 구체화 등 개장 전 운영계획의 합리성이 담긴 시설운영 관리대책 방안 강구를 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

12

관광정책과

단성 옛 단양생태공원 조성사업

(사업비/공정률) 10,000백만원 / 40%

예산확보: 5,300백만원

(사업기간)  ‘20. 6. 29.~ ’23. 6. 30.

(내용) 생태공원: A=170,000㎡

※ 조경시설물 설치, 조경수 식재 및

파크골프장(18홀), 녹지공간 조성

집행액: 1,845백만원

단성

북

하리

‣가용부지의 활용성 극대화 및 준공 후 시설운영 방안에 있어 재산 관리의 효율성 있는 대안 마련을 주문

. 파크골프장: 조성계획은 18홀임, 총 부지면적 대비 설치 면적은 50%~60%로, 잔여지는 별도 시설계획 없는 녹지공간으로 남겨짐 파크골프 여가수요 증가 및 장래대회 유치 등 활용성을 고려 규모 확충 필요

. 재산관리: 공원 전 구간을 차량 등 진․출입이 가능한 개방형으로 오픈시, 캠핑객 등에 의한 무분별한 공원용지 점용이 우려됨, 불특정 다수인을 위한 공공용 자산임을 고려 체계적 재산관리 방안 마련을 주문

13

균형개발과

※주관부서: 농업축산과

죽령 농특산물 판매장 신축

(사업비/공정률) 450백만원 / 95%

(사업기간)  ‘22. 6. ~ 11. 20.

(내용) 판매장 신축: A=124.49㎡

※ 소매점 101.19㎡, 창고 17.5㎡, 화장실 5.8㎡

집행액: 163백만원

대강

용부원

리

‣준공 후, 마을회로 위탁관리 또는 사용 허가의 추진 전 관계 법령에 따른 합리적 재산 위탁, 허가 방안 마련을 주문

‣판매장 시설보완에 대하여 아래와 같은 개선점을 주문

. 간판: 건물 형태와 조화된 디자인․글체 등이 가미된 가시성 있는 건물간판 설치의 필요성을 주문

. 채양: 건물 전면부에, 햇빛가림 및 빗물 방지용 채양시설 시공의 필요성에 대한, 조치방안 강구를 주문

. 안전난간: 건물 좌측, 화장실 부분 안전사고 예방을위한 전도 방지 안전난간을, 추가 설치 시설준공 등 사용개시 전, 선제적 안전관리 조치의 확립을 주문

. 가판대: 수탁자가 판매장 앞을 점용한 가판대 설치의 허용 여․부에 대한, 시설 위탁관리 구체화를 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

14

농촌활력마케팅과

미노지구 밭기반 정비사업

(사업비/공정률) 2,098백만원 / 70%

예산액: 1,224백만원

(사업기간)  ‘21. 12. ~ ’22. 12. 24

(내용) 관정2개소, 송수관로 1,485m, 배수관로

2,991m, 급수관로 5개소 1,283m

농로(B=3.0m) 1,676m / 집행액: 801

대강

미노리

‣준공 후, 마을로 위탁관리 될 농업용수 공급 시설물인 물탱크, 송수관로 등 중요시설물 유지․관리 운영에  합리적 관리방안 담보의 필요성을 주문

특히 동절기 물탱크 및 배관설비 내 용수의 퇴수 작업을 적기에 실시, 배관 등 관로 동파의 손․망실 발생으로 관리 부실에 기인한 불필요한 추가 재정 소요가 없도록 관리자 지정 등 시설물 사용․관리에 책임성이 수반된 대책안 마련을 주문

15

균형개발과

※주관부서: 문화체육과

상진생활체육시설, 실내 주차장 설치

(사업비/공정률) 4,000백만원 / 80%

(사업기간)  ‘21. 11. ~ ’23. 1. 11.

(내용) 지상3층 (연 면적 2,655.85㎡)주차타워

신축 ※ 수용가능 주차대수: 91대

(계약) 2,407백만원 / (집행) 1,733백만원

단양

상진리

‣현지점검 결과 다음과 같은 개선조치 방안 마련을 주문

. CCTV: 차량 및 물품도난 방지와 각종 사고 예방 등 각종 위험요인으로부터 이용객의 안전 담보를 위한 방범 영상장치 설치 필요성을 주문

. 각 층으로 연결되는 커브구간 개선: 1층~4층으로 연결되는 커브 지점의 철골 기둥에 출차차량 긁힘 충돌 방지를 위한 보호장치 설치 방안 마련을 주문

. 옥상주차장: 옥상주차 후 도보로 출입 하는 공간과 인접된 체육공원 도로, 인도 부분 휀스 간 빈 공간은 추락사고 등의 위험성을 내포, 추락방지용 덮개시설 설치로 준공 전에는 사업장 안전관리를 준공 후에는  이용자 등 주민 안전대책 마련의 시급성을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

16

균형개발과

※주관부서: 보건증진과

단양 보건의료원 건립사업

(사업비 / 공정률) 16,594백만원 / 70%

(사업기간)  ‘21. 11. 26. ~ ’23. 3. 01.

(내용) 부지: 8,429㎡ /연* 면적: 2,877.85㎡

8개과 30병상 (지하1층, 지상2층)

외래진료실 증축설계 2,995.73㎡(↑117.88)

보건복지부(건강증진개발원)변경 심의신청

단양

상진리

‣의료원 시설배치, 진료동선, 예산증가 등 추진과정에서 도출된 제반 문제를, 그 원인 발생일로 5개월 여가 지나도록 의회와는 별다른 협의 없이 공사중지, 재정증액, 배치변경을 기 결정한 뒤, 사후 설명된 과정을 상기, 지적함

‣한편 변경 계획된 진료시설 배치, 동선구상 등이 합리성있게 도출된 타당성이 반영된 결과내용에는 공감을 함

‣계획기간 내 견실히 준공될 수 있도록 사업공정 관리에 만전을 기하여 줄 것과 현지점검에 따른 개선사항으로는

‣보건소와, 보건의료원간의 연결통로는 경사각의 완만한재조정, 안전시설 설치로 경로자, 장애인 등의 이용에 불편이 없도록 시공중에 있는 구조물 개선 필요를 주문

17

산림녹지과

2022년 임도신설사업(어의곡 지구)

(사업비/공정률) 590백만원 / 60%

(사업기간)  ‘22. 4. ~11. 11.

(내용) 간선임도 신설 1식 (1.7 km)

※ 집행액: 200백만원

가곡

어의곡리

‣신설 임도의 시점부에 재 설치 예정인 배수관은 집중 호우시 흘러내리는 빗물이 원활히 배수될 수 있도록, 충분한 우회 공간을 확보 하여 기존 임도 하단부 집수정을 통해 배출 될수 있도록 하여 줄 것을 주문

18

안전건설과

대대리 군도 7호선 매남교 가설공사

(사업비/공정률) 1,700백만원 / 20%

(사업기간)  ‘22. 4. ~ ’23. 1. 22.

(내용) 선형개량 L = 540km, B = 8.0m

교량 재가설 L = 110m, B = 11m

가곡

대대리

‣주민의 도로이용, 편의성 제고 측면에서 마을 기초인프라 시설로 완결성을 갖출 필요성 있음 현재 시행 구간에 인접된 도로 포장 등 미확장 잔여구간

‣약 100m에 대한,  추가 시공 계획과 소요액 산출, 재정 확보 방안 및 주민의견 등을 수렴한 대안 고려를 당부

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

19

관광정책과

매포읍 경관조명 설치

(사업비/공정률) 450백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ 9. 05. <준공>

(내용) 중심가로 경관조명 설치: L=400m

매포

시가지

‣현 매포읍 관내 시가지 구간에 시공된 경관시설은 장치수량 및 면적 등에 있어 도심지 야간을 비추는 경관의연출능력 등 가시성 및 주민 효용이 부족한 점을 상기

조명의 추가 설치 계획을 구상, 도심의 매력있는 야간 경관자원으로 기능성 등을 갖출 수 있도록, 지역적 여건 및 현황이 반영된 개선안 마련의 필요성을 주문

일몰

후

점검

20

관광정책과

매화공원 경관조명 설치

(사업비/공정률) 300백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ 7.  <준공>

(내용) 데크산책로 경관조멍 설치

매포

삼봉대교

「특이사항 없음」“위 19번” 주문 사항과 같음

일몰

후

점검

21

관광정책과

삼봉대교 경관조명 개선사업

(사업비/공정률) 900백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ 7. 25. <준공>

(내용) 대교교량 경관조명 설치: L=350m

매포

삼봉대교

「특이사항 없음」

일몰

후

점검

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

22

관광정책과

고수대교 경관조명 설치사업

(사업비/공정률) 1,500백만원 / 40%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ 11. 12.

(내용) 미디어 브릿지* 구축 1식 (L=200 m)

* 경관조명 시스템 구축

단양

별곡리

「특이사항 없음」

일몰

후

점검

23

관광정책과

건축물 스카이라인 경관조명 설치공사

(사업비/공정률) 1,400백만원 / 80%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ 11.

(내용) 단아루 외 2개소* 경관조명 설치

* 단양읍 관내 시가지 L=4.0 km

단양

상진리

「특이사항 없음」

일몰

후

점검

24

관광정책과

적성대교 경관조명 설치공사

(사업비/공정률) 250백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 5. ~ 9. 07. <준공>

(내용) 교량 경관조명 설치 L=355m

단성

적성대교

「특이사항 없음」

※ 사업장 점검 대상 동선 구간에 있는 이끼터널 경관반딧불 조명의 경우, 자연경관과 매칭되는 프로그램 빛 연출 능력 구현 등 매력있는 경관 포인트 장소로 지역 야경관광 자원으로 자리매김 할 것으로 확인됨

※  소금정 공원 또는 관내 수목 1~2개소를 선정, 비슷한 유형의 경관조명 추가설치 방안 마련 필요성을 주문

일몰

후

점검

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

25

관광정책과

단양강 수변산책로 야간 관광명소화 사업

(사업비/공정률) 1,400백만원 / 40%

(사업기간)  ‘22. 1. ~ 12.

(내용) 수변로 구간 1.4km 경관조명 설치

단양

수변

공간

「특이사항 없음」

일몰

후

점검

26

관광정책과

온달관광지 세트장 정비사업

(사업비/공정률) 720백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 4. 18. ~ 9. 08. <준공>

(내용) 세트장 5개동 보수공사

수당황궁*: 지붕기와, 구조보강, 방수공사

낙양성문**: 구조보강, 방수공사

* (수당황궁) 39동~41동 / **(낙양성문) 43동~44동

영춘

하리

‣관광지 매표소 전면부 창에 게시된, 단양관광관리공단 협약체결 현황 알림판 내용* 교체 또는 수정 필요

* 단양관광관리공단은 현 단양관광공사의(‘22. 1월)전신

‣수당황궁 등 시설물 정비사업 점검결과 별도 특이 의견은 없으나, 방송 촬영의 필요에 따라 단청, 처마, 창방에 부착된 스티커 색바램, 부분 탈락․삭음은 건물 미관을 저해하는 원인으로 지적, 이에 대한 개선조치를 주문

27

산림녹지과

소백산자연휴양림 전망대 설치사업

(사업비/공정률) 1,000백만원 / 80%

(사업기간)  ‘22. 5. 24. ~ 11. 19.

(내용) 전망대 5층:  D=8.9m  / H=18m

데크형 계단설치: 41m

※ 집행액: 664백만원

영춘

하리

‣탁 트인 가시성이 확보된 지역 경관자원으로서 기능성 충족과 활용성에 있어 이용자 만족도를 제고할 수 있는 효율과, 효용성을 갖춘 경관시설로 확인됨

‣다만, 시설의 주 구조물이 목재데크임으로 동절기 결빙을 대비한  미끄럼 방지패드 설치  야간 이용을 고려한 등기구 설치  각 구획 동선에 있는 난간 시설의 유지 관리에 만전을(손․망실시 즉시보수) 하여 줄 것을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

28

농촌활력마케팅과

석교2리 농촌생활환경 정비사업

(사업비/공정률) 1,035백만원 / 100%

(사업기간)  ‘18. 9  ~ 19. 12.  <준공>

(내용) 마을진입로확장 A=235㎡(아스콘포장)

안길정비 A=2,030㎡,덧 씌우기A=437㎡

공동시설리모델링 A=178.5㎡

어상

천면

석교

2

리

‣농촌 중심지 거점기능 활성화를 위해 시행된 동 계획의 단위 사업 중 마을안길 정비는 총 구간 226m이나, 실제 마을 진입 초입부터, 두 갈래 커브길이 합류되는 약 90m 구간은 계획된 바와 같이 시공되지 않은 상황을 볼 때

‣거주민의 이동성 제고, 마을안길 도로 기능 향상을 위한 종합적인 계획* 마련과 검토를 주문

* 예산산출 및 확보, 주민의견수렴, 상황․여건 등 종합고려

일몰

후

점검

29

균형개발과

※주관부서: 문화체육과

어상천 생활체육공원 조성

(사업비/공정률) 1,000백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 4. ~ 10. 17. <준공>

(내용) 체육공원 조성* 등 1식

* 인조잔디 구장, 운동기구, 편의시설

어상

천면

임현리

‣주 구조인 무대시설 우측 편 뒤쪽으로 화장실이 설치됨 그 결과 무대 앞 전면부 한 구획에 시설물이 집중되어 배치된 구조, 공원 형상을 아쉬운 점으로 확인하면서,

‣현 준공된 무대에는 각종 대회 등 행사에 필요한 전기 콘트롤 박스 등 전원 장치가 마련되어 있지 않아 관련사항에 대하여는 추가적 보완 대책 필요성을 주문

30

기술지원과

종균활용 장류품질향상기술 시범사업

(사업비/공정률) 70백만원 / 61%

(사업기간)  ‘22. 3. ~ 12. 31. /민간자본보조

(사업장) 덕문곡리 158번지

(내용) 가공시설설치 및 장비구입, 제품개발

지원 등 ※ 콩알메주생산*, 품목제조

* 저장고 1식, 건조기 2대, 성형기 등 가공장비7종

어상

천면

덕문

곡

리

‣생산기반 시설은 완료 되었음음 확인하며, 보조사업자의제품의 제조․가공 생산 신속한 이행(업종등록, 품목제조보고) 등 계획된 절차 진행에 완결성을 갖추도록 지원

‣보조금 예산의 편성 및 지원계획 등 사업의 목적성에 기반한 성과 창출이 달성될 수 있도록 민간에 대한 보조지원사업 관리에 만전을 기하여 줄 것을 당부

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

31

안전건설과

가평리 침수예방사업

(사업비/공정률) 600백만원 / 10% (특교세)

(사업기간)  ‘22. 6. ~ 12. 31.

(내용) 하천범람 / 농경지 침수예방 사업

․사방댐 1개소(L=17mH=3.0),                    암거 L=7.3m (6.0×1.7)

※ 집행액: 231백만원

매포

가평

리

‣2020. 8월 집중 호우로 인해 피해를 입은 수해 지역이었음을 상기하면서

‣계획된 사업 공정에 만전을 기하여 줄 것과, 특히 수해예방 주 구조물인 사방댐은 예측되지 않는 재해에 대응하는 방지 시설로 견고히 시공될 수 있도록 당면한 공공목적사업 성과 달성에 만전을 기하여 줄 것을 주문

32

안전건설과

상시재해위험 개선지구 정비사업

(사업비/공정률) 10,766백만원 / 82%

(사업기간)  ‘20. 6. ~ ’23. 6. 30.

(내용) 제방축제: L = 3.1km, 교량 3개소

가동보 2개소 재가설 ※ 집행액: 6,950백만원

매포

상시리

「특이사항 없음」

33

산림녹지과

매화공원 유아숲 체험원 조성사업

(사업비/공정률) 148백만원 / 100%

(사업기간)  ‘22. 7. 22. ~ 10. 19. <준공>

(내용) 유아숲 체험원 조성 1식 (산79번지)

․모임, 놀이, 체험공간 & 진입로 정비

매포

평동리

‣다소 부족한 예산으로, 아기자기한 시설물 배치 구상 등 조성에 있어 수고를 한 관계 직원들분들의 노고를 격려

‣동 사업 결과물의 수혜 대상은 유아(5살~7살)로 시설의 이용에 있어 다음과 같은 개선이 요구됨을 주문

. 네트: 시설물 안전보강, 경사면으로부터 위치 이동

. 전도, 부딪힘 방지 등: 각진 부분 등 패드마감․보강

. 안전: 높낮이 고저차를 고려, 시설사용간 안전동선 확보

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

34

관광정책과

매화공원 편의시설 정비사업

(사업비/공정률) 450백만원 / 80%

(사업기간)  ‘22. 6. ~ 11. 25.

(내용) 편의시설, 수목식재 등 1식(산79번지)

․이동식화장실, 원두막, 운동기구 등

매포

평동리

‣편의 시설 정비로, 매화공원의 기능(주민접근, 활용성)이 제고 되었음을 확인하면서 공원의 야간활용 및 접근성개선 등 시설물 기능 보강을 위한 대안 마련을 주문

. 진입도로 및 광장 조명설치: 야간에의 접근성 제고 및 진․출입 동선에 안전성 확보를 위한 등기구, 조명 등 기능보강 시설물 설치의 필요성과 대안 마련을 주문

. 편의시설 등 확충: 매화공원에서  유아숲과 연결되는 산책길 구간, 가용 부지를 활용한 적정 규모의 황토길조성 방안 마련을 주문

35

균형개발과

올누림 행복센터 건립(건축공사)

(사업비/공정률) 22,000백만원 / 35%

(사업기간)  ‘21. 11. ~ ’23. 11. 11.

(내용) 지상 4층 (연 면적: 6,255.12㎡)

1층: 가족,생활문화 / 2층: 작은영화관, 생활문화

3층: 도서관, 가족 / 4층: 도서관, 생활문화센터

※ 계약: 14,141백만원 / 집행: 6,650백만원

단양

별곡리

‣점검결과 사업장 내 작업공간 협소로 각종 장비이동 및  자재운반 시, 현장작업 인력의 안전사고 발생이 우려되므로, 사업장 내 철저한 안전관리 대책 마련을 주문

‣현 공정상 별도 시설계획이 없는 건물 옥상 공용공간의 활용방안 마련의 대안강구를

옥상의 난간은 이용자 추락 방지 등을 위한 견고성이 검증된 시설물로서 설치에 있어 기능성 강화를 주문

‣센터부지 주위는 주변환경과 조화로운 식목식재를 주문

‣도서관 내부 디자인, 동선, 각종 기자재 배치는 타 자치단체 운영사례 등의 비교 견학을 통해, 단순 교양 기능만을 갖춘 시설이 아닌 문화, 여가, 교육이 복합된 시설로주민문화 욕구가 충족될 수 있도록  대안 마련을 주문

연번

사업개요 (사업명, 사업비, 공정 등)

대상지

점검결과 (지적 및 개선사항)

비고

읍면

리

36

균형개발과

남한강 어우름길 조성사업

(사업비/공정률) 3,000백만원 / 100%

(사업기간)  ‘21. 2. ~ ’22. 6. 09. <준공>

구간: 구 국궁장 ~ 단양생태체육공원

(내용) 연결로개설 L=292m, B=12.0m, 교량

가설 L=45m, 전망데크, 주차장 조성

단양

별곡리

「특이사항 없음」

37

안전건설과

기촌 급경사지 정비사업

(사업비/공정률) 2,500백만원 / 100%

(사업기간)  ‘21. 5. ~ ’22. 4. 25. <준공>

(내용) 기대기식 옹벽 A=2,911㎡

낙석방지책 보수 L=200㎡

※ 집행액: 2,306백만원

단양

기촌리

「특이사항 없음」